Příloha č. 1
Dodatek č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený mezi smluvními stranami

Zhotovitel

AiP Safe. s.r.o. U stadionu 157
266 01 Beroun 2
IČ: 26128012 
DIC: 026-26128012 Bankovní spojení: 
Číslo účtu: Z
Zastoupená:
ČSOB. a.s, 161790816/0300
ing. Janem Motlem - jednatelem Petrem Břicháčkem - jednatelem

Odběratel:
Městská část Praha 14
Bratří Venclíku 1073
19821 Praha 9
IČ: 00231312
DIC: neni plátcem DPH
Bankovní spojení:	1. Městská banka. a.s.
Číslo účtu:	27-9800050998/6000

                                        Zastoupená: ing. Miroslavem Froňkem - starostou

dále označovány jako .,smluvní strany",
Smluvní strany uzavřely dnešního dne v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů s přih1édnutím k ustanovení § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb.. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) na základě vzájemného a úp1ného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních tento

Dodatek č.1
(dále jen „Dodatek"):

Článek 1
Předmět dodatku

Předmět Smlouvy se na základě tohoto Dodatku mění takto:
a.	Ruší se obsah přílohy č.3 a nahrazuje se obsahem uvedeným v tomto Dodatku č.1.

1.DMS Zahájení: 
1.DMS 
Zahájení:	                                    25.6.2004
Ukončení:                                                 1.7.2004
Délka školení:                                       administrátoři – 2x4 hod

2. Evidence smluv 
Zahájení:                                                 22.6.2004
Ukončení:                                                31.1.2005
Délka školení:                                         6x4 hod 
Zkušební provoz:                            37 pracovních dní

3. Usnesení Rady a Zastupitelstva 
Zahájení:                                                 7.9.2004
Ukončení:                                                31.1.2005
Délka školení:                                         10x4 hod
Zkušební provoz:                            40 pracovních dní

4. Spisová služba 
Zahájení:                                                8.11.2004
Ukončení:                                               11.3.2004
Délka školení:                                          6x4 hod
Zkušební provoz:                           30 pracovních dní

5. Veřejné zakázky 
Zahájení:                                        10.2.2005
Ukončení:                                       18.4.2005  
Délka školení:                                 8x4 hod
Zkušební provoz:                     20 pracovních dní

6. Účetní dok1ady 
Zahájení:                                         24.3.2005
Ukončení:                                         3.6.2005
Délka školení:                                  10x4 hod
Zkušební provoz:                       15 pracovních dní

7. Evidence stížností 
Zahájení:                                         18.5.2005
Ukončení:                                          1.7.2005
Délka školení:                                    6x4 hod
Zkušební provoz:                       15 pracovních dní

8. Rozpočet
Zahájení:                                          17.6.2005
	Ukončení:	23.8.2005
	Délka školení:	8 x 4 hod
  Zkušební provoz:	       25 pracovních dní
9. Podk1ady pro poradu vedení
  Zahájení:	25.7.2005
	Ukončení:	21.9.2005
	Dé1ka ško1ení:	6 x 4 hod
  Zkušební provoz:	15 pracovních dní
10. Redakční rada
Zahájení:                                          25.7.2005
Ukončení:                                         21.9.2005
  Dé1ka školení:	6 x 4 hod
  Zkušební provoz:	15 pracovních dní
Podrobnější časový plán plnění bude dohodnut jednáním odpovědných zástupců obou stran před zahájením prací jednotlivých dílčích etap. Při nich lze dohodnout již termíny předání a akceptace analýzy a zejména termíny školení administrátorů a uživatelů.
Článek 11

                                             Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Jakékoli změny, dodatky či zrušení tohoto Dodatku č. 1 i jednostranné projevy vůle smluvních stran musí
být učiněny v písemné formě. Písemné změny a doplňky tohoto Dodatku č. 1 budou provedeny písemnými dodatky, opatřenými pořadovým číslem, datem a podpisy obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se shodli na skutečnosti prvního projevu vůle jimi či některou z nich učiněného v duchu
    tohoto Dodatku č. 1 jako závazného a zakládajícího její účinnost.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti identických výtiscich s platnosti originálu, z nichž zhotovitel
     obdržel dva a objednatel tři výtisky.
5. Smluvní strany proh1ašují, že Dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o
     všech ustanoveních Dodatku č. 1 připojují své podpisy.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti k datu podpisu Smluvními stranami a účinnosti prvním úkonem učiněným
     k jejímu plnění.
7. Text Dodatku č. 1 je veřejně přístupnou listinou.
Datum:                                                                          Datum:
Zhotovitel:                                                                    Objednatel:
	AiP Safe s.r.o.	Městská část Praha 14
Podpis:                                                                           Podpis:
	Jméno: Ing. Jan Mottl	Jméno:         Ing. Miroslav Froněk
              Funkce: Jednatel	Funkce: starosta Městské části Praha 14