Příloha č. 1

II.	Náležitosti smlouvy o dílo uzavřené mezi Městskou částí Praha 14 zastoupenou SMP 14, a.s. a firmou Kavoka s.r.o. na akci : „Zastřešení sjezdů do garáží A,A1/1 a A1, Černý Most“

cena ……………………1 671 528,27,- Kč vč. DPH
platební podmínky……   záloha ve výši 10%, dále měsíční fakturace dle provedených prací do 
                                       výše 90%, závěrečná faktura ve výši 10% po předání díla a 
                                       odstranění případných nedostatků
termín plnění …………   2 měsíce od podpisu smlouvy o dílo
záruka ………………… 60 měsíců od předání díla
sankce …………………zhotovitel  -  0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení   
	              	    objednatel – 0,05% z dlužné částky za  každý započatý den prodlení

III.	Náležitosti smlouvy o dílo uzavřené mezi Městskou částí Praha 14 zastoupenou SMP 14, a.s. a firmou Helvott s.r.o. na akci „Rekonstrukce terasy Vlčkova 1067“

cena ………………………  734 312,- Kč vč. DPH
platební podmínky………     zálohová faktura ve výši 15% po podpisu smlouvy, konečná   
 faktura po dokončení díla
termín plnění ………………zahájení prací: 1.7.2005, dokončení díla 16.8.2005 
záruka ……………………  36 měsíců od podpisu předávacího protokolu
sankce ……………………  zhotovitel  -  0,05% z ceny díla za každý den prodlení	
                                            objednatel – 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení 
                                            v případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků zaplatí 
                                            zhotovitel 500,- Kč za každý den prodlení