Příloha č. 1

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 28.6.2005
--------------------------------------------------------- 

I.
Smluvní strany

1. Zhotovitel : KAVOKA stavební společnost s.r.o.
adresa: Peroutkova 1384/5, Praha 5
zastoupený : Martin Vojan jednatel společnosti
ve věcech smluvních a technických vztahů je oprávněn jednat:
Martin Vojan, jednatel společnosti
IČ 271 84 889, DIČ: CZ 27184889

2. Objednatel: Městská část Praha 14
se sídlem Bří Venclílků 1073, 198 21 Praha 9, IČ 00231312, DIČ:CZ 00231312
zastoupená obchodní společností : Správa majetku Praha 14,a.s.
adresa: Konzumní 640, 198 00 Praha 9, IČ:25622684, DIČ: CZ25622684
zastoupený: Ing. Karlem Cekotou, předsedou představenstva
                     Ing. Evou Bažilou, místopředsedou představenstva

Výše uvedené smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na změně následujících ustanovení Smlouvy o dílo :

Čl. II bod 1. se ruší a nyní zní :

1.	Cena:
Objednatel se zavazuje za provedení díla specifikovaného v čl. I této smlouvy uhradit ( zaplatit) zhotoviteli cenu ve výši viz čl. II.

Cena celého díla byla určena :
smluvní cenou ve výši 1,641.975,87 Kč, DPH 19% 311.975,40 Kč
                                    celkem vč. DPH  1,953.951,27 Kč 
provedené, fakturované práce v měsíčních fakturacích budou objednatelem propláceny do 14 dnů ode dne převzetí faktury. 

Čl. V bod 1. se ruší a nyní zní :

     1. Plnění díla, které bylo započato po vypracování původní projektové dokumentace,  se přerušuje po dobu zimního období.
V plnění díla bude pokračováno podle stávající projektové dokumentace od 1.4.2006 za předpokladu, že to dovolí klimatické podmínky.  
Přesný termín pokračování prací bude uveden ve stavebním deníku spolu se zdůvodněním pro případ, že práce začnou po 1.4.2006.

Čl. VI se rozšiřuje o bod č. 4, který zní :

4.	Ustanovení v bodě 2. a 3. tohoto článku se nepoužije po dobu přerušení plnění díla dle čl. V bod 1 tohoto dodatku. 

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění. 

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž jeden obdrží   zhotovitel  a tři objednatel.

Tento dodatek je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

V Praze,  dne .............................

Zhotovitel:                                                                                  Objednatel:

....................................................                                     ..................................................