Příloha č. 1
Projektový záměr - "Zahrada v srdci sídliště"
JAHODA (občanské sdružení)
Vybíralova 969, 19800 Praha 9
Jan Dolínek, ředitel
+420775 674 060
jan.dolinek@jahodaweb.cz
www.jahodaweb.cz
Zdůvodnění smyslu a záměru:
Několik minulých let byla zahrada v užívání nestátní MŠ a ZŠ, které počátkem letošního roku ukončily svůj provoz. Vzhledem k tomu, že nebyla zahradě (pravděpodobně z nedostatku financí) věnována odpovídající péče, je podle ilustračních fotografií pořízených v únoru 2006 vidět, že zahrada je sice "strategicky" umístěna v centru panelákového sídliště a tudíž velice blízko lidem a dětem, které by jí mohli využívat, ale zároveň působí velice zanedbaně a někdy nebezpečně a proto potenciální návštěvníky
  spíše odpuzuje.	
JAHODA po dohodě s MŠ a ZŠ zahradu v minulých 3 letech částečně využívala v odpoledních hodinách a částečně přispívala k její údržbě když o to ze strany škol nebyl zájem.
Aktuálně se JAHODA uchází o post "správce" zahrady a společně s MČ částí by chtěla v roce 2006 začít zahradu zvelebovat a měnit tak, aby se stala příjemným místem pro všechny obyvatele Černého Mostu, kteří žijí v jejím okolí.
JAHODA je od roku 2002 v přímém kontaktu s dětmi a mladými lidmi, kteří dochazí do některého
z jahodových klubů a při komunikaci s nimi jsme zjistili, že většina z nich zůstává o víkendech doma, protože "babičky" bydlí buď v Praze nebo naopak daleko a vlastní chalupu či chatu v rodině nemají. Jsou tedy odkázáni na zábavu obchodních center atd.
Hlavním záměrem projektu je získání obyvatel sídliště žijících v okolí zahrady ke spolupráci a společně s nimi "objevit a zvelebit" místo, které budou moci využívat pro realizaci nápadu vlastních i k seznámení nebo účasti na akci pro ně zorganizované (např. piknik v trávě, rande, společná hra, mezigenerační setkání, soutěže, koncerty, ochrana před sluncem či deštěm).
Cíle projektu:
. Opravit (částečně svépomocí) a částečně přebudovat zahradu sousedící se sídlem občanského sdružení JAHODA v Praze na sídlišti Černý Most, které ve svých prostorách provozuje kluby JAHŮDKA pro rodiče s dětmi, JAHODA pro děti a DŽAGODA pro děti a mladé lidi.
	-   Výstup: opravená, funkční a využívaná zahrada, o které obyvatelé sídliště vědí,                                       že mohou její prostor zdarma navštívit
	. Posílit postavení občanského sdružení JAHODA v rámci komunity okrajového pražského sídliště a
	umožnit občanům městské časti Praha 14 (žijícím v dané lokalitě) aktivně se zapojit do       zlepšení sídlištních životních podmínek a udělat něco nejen pro sebe, ale i prostředí, ve       kterém žijí.

	  - Výstup: minimálně 50 dobrovolníků vykoná alespoň 5 hodin činnosti související                      s opravou nebo údržbou zahrady; do 3 měsíců od opravení zahrady se na ni                      uskuteční minimálně 2 akce určené pro veřejnost;
  . Vytvořit prostor pro občany Prahy 14 žijící na Černém Mostě, který budou moci aktivně        využívat ve svém volném čase k odpočinku, procházce, seznamování, setkávání a         společným aktivitám.
	-  Výstup: zahrada je otevřena 7 dní v týdnu a je využívána mezigeneračně                        obyvateli sídliště Černý Most

Stručný popis a harmonogram projekt :
I. etapa (duben, květen 2006) - zpracování projektu realizace včetně detailního projektové dokumentace k rekonstrukčním pracím ve spolupráci s pracovníky Úřadu městské části Praha 14 (dále ÚMČ).
II. etapa (červen, červenec 2006) - oslovení (alespoň 3) a vybrání firmy, která provede práce související s úpravou terénu a práce, které vyžadují odbornou realizaci. Ve spolupráci s ÚMČ oslovení obyvatel sídliště a podpora jejich dobrovolnické činnosti.
III. etapa (srpen, září 2006) - realizace oprav a úprav zahrady s využitím činnosti dobrovolníků. Vybavení zahrady. Současně příprava prvních akcí určených pro veřejnost po otevření zahrady.
IV. etapa (září, říjen 2006) - zpřístupnění zahrady veřejnosti, realizace první akce pro veřejnost,propagace mezi obyvateli sídliště i celého uzemí Prahy 14	
V. etapa (1istopad 2006, červen 2007) - zpřístupnění zahrady veřejnosti, nepravidelné pořádání akcí pro veřejnost, na jaře prezentační akce JAHODY a propagace výstupu projektu
Kolika lidem bude projekt sloužit:
Počet obyvatel na sídlišti Černý Most je přibližně 21500. Jako přímou cílovou skupinu projektu odhadujeme minimálně 5% z celkového počtu obyvatel, kteří žijí v přímém sousedství zahrady.
Partneři projektu:
JAHODA - realizátor projektu, koordinátor dobrovolníků v projektu, částečná finanční spoluúčast na nákladech projektu (údržba vybavení zahrady, koordinace stavebních prací)
ÚMČ Praha 14 - partner projektu, částečná spoluúčast na nákladech projektu (zpracování projektové dokumentace úprav zahrady, podpora a zázemí pro dobrovolnickou činnost obyvatel Prahy 14 např.přistavení kontejneru na odvoz odpadu atd., propagace projektu v obecních vývěskách, na obecních stránkách a v Listech Prahy 14).
Nadace VIA - Dobročinný fond Philips Morris - finanční podpora realizace projektu.

Společnost DAMOVO - sponzor aktivit JAHODY pro děti na sídlišti Černý Most, finanční podpora realizace projektu.
Výše požadované částky:
Nadace Via	333 000 Kč	
Povinná spoluúčast 30%	99 900 Kč	
z toho		
JAHODA	30 000 Kč	
Praha 14	30 000 Kč (projekt + služby)	
DAMOVO	39 900 Kč	
Celkem	432 900 Kč