Příloha č. 1

Náležitosti dodatku smlouvy o dílo uzavřené mezi městskou částí Praha 14 zastoupenou    SMP - 14, a. s.

 a 

firmou Stavební firma Hartman spol. s r. o. Praha 6 na akci  „ Oprava havárie podlahy a sklepních kójí v suterénu bytového domu Cíglerova čp.1090, Praha 9 “;  
cena ……………………468 164,- Kč vč. DPH
platební podmínky……   fakturace po dokončení díla                                      
termín plnění …………  zahájení do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště, doba  
                                        realizace do 6 týdnů od zahájení prací