Příloha č. 1

Náležitosti smlouvy o dílo uzavřené mezi Městskou částí Praha 14 zastoupenou SMP 14, a.s.
 a 
 firmou  Kaziko a.s., Pod Turnovskou tratí 18, Praha 9 na akci : „Výstavba podporovaných bytů Broumarská 25, Praha 9“

cena …………………… 38 906 494,70,- Kč vč. DPH
platební podmínky……   jedenkrát měsíčně do 5-tého dne v měsíci faktura za provedené a  
                                         odsouhlasené práce a to až do výše 85%. Zbývajících 15% ze 
                                         sjednané ceny bude uhrazeno po odstranění všech nedodělků a po 
                                         vydání kolaudačního rozhodnutí.
termín plnění....................předání staveniště 1.6.2008, ukončení 30.10.2009 , realizace se bude 
                                         řídit  odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací.
záruka.............................. 60měsíců na dílo specifikované v čl.2 smlouvy, na stálobarevnost 
                                          plastových okenních profilů, izolační dvojskla s argonem 120 
                                          měsíců a na základové a svislé konstrukce 144 měsíců. Na dodávky 
                                          zařízení a technologií se vztahuje záruční doba poskytnutá 
                                          výrobcem.

sankce ………………… zhotovitel 
       -    za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl.4.3.smlouvy 105.000,-Kč za 
             každý den prodlení
-	za nevyklizení staveniště v termínech dle čl-4.4.smlouvy 105.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení
-	za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu 20.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení
-	za prodlení s termínem odstraněním reklamací 10.000,- Kč za každý den prodlení
-	za prodlení s termínem odstraněním  havárie  105.000,- Kč za každý den prodlení
-	nenastoupí-li zhotovitel k odstranění  reklamací v přiměřené lhůtě 20.000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 10 kalendářních dnů
-	uvede-li zadavatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel k jejímu odstranění v přiměřené lhůtě 105.000,- Kč za každý započatý kalendářní den v prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den.
-	za prodlení s termínem předání uzlových bodů díla v termínu dle harmonogramu prací 105.000,- Kč za každý den prodlení