Příloha č. 1

Náležitosti smlouvy o dílo uzavřené mezi městskou částí Praha 14 zastoupenou SMP 14, a.s.
a  
firmou BriMont s.r.o. na akci"Rekonstrukce  střechy Slévačská 496-497,  Praha 9"
cena …………………… 2239660,- Kč bez DPH
platební podmínky……   fakturace do 90% a 10% po předání 
termín plnění................... 1.7-20.8.2010
záruka.............................. 74 měsíců
sankce ………………… zhotovitel  -  nedokončení díla  5000,- za každý započatý den 
                                         prodlení , nevyklizení staveniště -5000,- za každý započatý den 
                                         prodlení  
a                                       
s firmou Mechanika a.s. na akci "Výměna oken, dozdění MIV - ul. Kardašovská 755,756  
                                                         severní průčelí (spol.prostory), Praha 9"
cena ……………………4530120,- Kč bez DPH
platební podmínky……   konečná faktura
záruka.......................... ..24 měs.
termín plnění..................2 měsíce
sankce ……………….   zhotovitel  -  0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení   
	              	    objednatel - 0,05% z dlužné částky za  každý započatý den prodlení 
a
firmou AZET-servis s.r.o. na akci "Oprava zábradlí balkonů a dlažby - ul. Rochovská 
                                                           764-767, Praha 9". 
cena …………………… 2993766,- Kč bez DPH
platební podmínky……   záloha ve výši 30% a konečná faktura
termín plnění................... 20 týdnů  od předání staveniště
záruka..............................60 měsíců
sankce ………………… zhotovitel  -  smluvní pokuta 2.000,- Kč za každý započatý den 
                                                              prodlení   
	                             objednatel - 0,05% z dlužné částky za  každý započatý den prodlení