Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. 005/2010
Smluvní strany:
1. Zhotovitel:         PAMA spol.s.r.o.
                              Tichá 3/1224
                              150 00 Praha 5
 IČ:                        45787247
Bankovní spojení: Kb Praha 5 č.ú. 88102-051/0100
Zastoupena:           Ing. Josef Macháně, jednatel společnosti

2. Objednatel:       Městská část Praha 14
                              Bratří Venclíků 1073
                              198 21 Praha 9
IČ:                         00231312
Bankovní spojení: 49023-9800050998/6000
Zastoupená:          Správou majetku Praha 14 a.s.
                              Ing. Karel Cekota, předseda představenstva
                              Ing. Eva Bažilová, mistopředseda představenstva                               
                              Metujská 907
                              198 00 Praha 9

níže uvedeného dne, měsíce, roku se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo č. 005/2010 ( dále jen „ Smlouva“) takto:
I.
Čl. III. Smlouvy se doplňuje o bod č.3, který zní takto :

3.  Vícepráce :
Předmět díla uvedený v čl. III Smlouvy a specifikovaný v příloze č. 1 smlouvy se navyšuje o následující vícepráce

1.  Zemní práce :	
Ruční výkop 12m2	
Přesun zeminy, nakládka	
Vyřezání přesahující železo výstuže zákl. desky	
Uložení zeminy na skládku vč. dopravy	
2.  Zednické práce:	
Začištění základové desky pro navaření izolace	
Založení a vyzdění opěrné zdi pro okap. chodník 14bm	
Dodávka a zásyp zeminou vč. zatravnění	
3. Svislé izolace :	
Navaření svislé izolace	
Překrytí geotex.	
4. Práce související:	
Přesun materiálu vnitrostaveništní:	
Doprava	

II.
Čl. IV. Smlouvy se ruší a nově zní takto :
Smluvní cena za dílo ve výši 2.535.000,--Kč bez DPH se navyšuje o vícepráce ve výši 162.748,--Kč bez DPH.
Celková smluvní cena za dílo činí 2.697.748,--Kč bez DPH.

Tato cena je nepřekročitelná, lze ji měnit pouze písemným dodatkem ke Smlouvě odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

III.
  
Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a dodavatel 1 výtisk.

Ostatní  ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

V  Praze dne: 11.5.2010

Objednatel:							Zhotovitel: